2025. 노후 특수학급 환경개선 사업 결과 보고서
튻

OO고등학교

Ⅰ		근 거

1. ‘2025년 노후 특수학급 환경개선 및 교재교구비 지원 학교 선정 결과 알림’

[유아특수교육과-13527(2025. 9. 17.)]

2. ‘2025년 노후 특수학급 환경개선 및 교재교구비 교부(재배정) 안내’

[유아특수교육과-14135(2025. 9. 30.)]

Ⅱ		목 적

1. 노후화된 특수학급 교실 환경 재구성 및 교육과정 운영에 필요한 교재·교구 확충으로 특수교육 질적 향상 도모

2. 쾌적하고 안전한 특수학급 교육환경 조성으로 특수교육대상학생의 정서적 안정 및 교육력 향상

Ⅲ		학교 현황

(2025. 12. 1. 기준)

전체 학급 수	전체 학생 수	특수학급 수	특수교육대상학생 수
42학급 특수학급포함	1085명	4학급	총 28명 (특수학급 배치: 26명/일반학급 배치: 2명)

Ⅳ		추진과정[일정포함]

1. 노후 특수학급 환경개선 및 교재교구비 교부 : 2025. 9. 30.

2. 노후 특수학급 환경개선을 위한 사전 계획수립 : 2025. 12. 10.~12. 15.

3. 노후 특수학급 환경개선을 위한 협의회 개최: 2025. 12. 15.

4. 노후 특수학급 환경개선을 위한 공사설계 및 계약, 심사 : 2025. 12. 15.~12. 31.

5. 노후 특수학급 환경개선을 위한 공사 진행: 2026. 1. 9.~2. 20.

가. 싱크대 상판 및 벽면 타일, 오픈장 시공, 싱크볼 교체 및 온수기 이전 설치

나. 좌측 출입문 폐쇄 및 벽면 시공, 타공판 설치

다. 복도측 및 창측 수납장 설치(아일랜드 작업대 포함) 및 전면 수납장 문짝 교체

라. 바닥 전체 데코타일 작업, 교실 3연동 출입문 교체

마. 교사용 책상 및 칸막이 세트, 학생용 모둠 책상 구입

6. 노후 특수학급 환경개선 공사 하자 보수 및 청소: 2026. 2. 5.~2. 20.

Ⅴ		특수학급 환경개선 내역

1. 시설 설치 내용 및 교구·자료 구입 목록(구체적인 예산 집행내역)

구분	내용	세부내용	수량	단가	금액(원)	비고
시설비	인테리어	가설공사	1	302,084	302,084	교부 예산
		철거공사	1	1,033,459	1,033,459
		목공사 및 수장공사	1	9,132,925	9,132,925
		창호공사(3연동 출입문)	1	1,728,211	1,728,211
		타일공사	1	504,751	504,751
		설비공사	1	702,490	702,490
		일반관리 및 부가가치세	1	5,496,080	5,496,080
	전기공사	콘센트, 전기선 교체 등	1	1,100,000	1,100,000
	소계				20,000,000
비품 및 기자재 구입	사무용 집기 (조달 물품)	교사용 책상	1	401,000	401,000	학교 자체 예산
		교사용 의자	1	237,600	237,600
		캐비넷	1	135,000	135,000
		학생 모둠 책상	1	719,000	719,000
		사무실 칸막이세트	1	642,300	642,300
		롤스크린	1	285,000	285,000
		실습 작업대	1	1,560,000	1,560,000
		디지털 도어락	1	270,000	270,000
		조달 수수료	1	13,067	13,070
	소계				4,262,970
총계					24,262,970

2. 공간 배치 사진

세부내용
학생 모둠 책상 및 좌측 수납장	교실 전면 바닥 데코 타일
기존 싱크대 상부장 철거 및 상판, 수전 등	바리스타 실습 작업대(하부 수납 형식)
교실 후면(창측) 수납장	교사 자리 이동 및 타공판 등 벽면
교실 3연동 도어 출입문 및 도어락	교실 전면 수납장 문 교체 및 상부장 철거

Ⅵ		기대 효과

1. 특수교육대상학생의 특성과 요구에 적절한 환경구성으로 효과적인 교육활동을 전개한다.

2. 개별화된 학습이 가능한 특수학급의 시설 및 교육환경 구성으로 바람직한 특수교육 환경을 구축한다.

3. 쾌적하고 안전한 교육환경 조성으로 교육 만족도를 높인다.

(서식2)

노후 특수학급 환경개선 및 교재교구비 집행 결과
단위: 천원
학교명	교부액 (A)	사업명	집행액(B)				집행잔액 (C=A-B)	비고
			세부사업내역	물량 (수량)	단가	금액
거제 옥포 고등 학교	20,000 천원	노후 특수학급 환경개선 및 교재교구비	가설공사	1	302,084	302,084	19,697	교부 예산
			철거공사	1	1,033,459	1,033,459	18,664
			창호공사	1	1,728,211	1,728,211	16,936
			타일공사	1	504,751	504,751	16,431
			설비공사	1	702,490	702,490	15,729
			일반관리 및 부가가치세	1	5,496,080	5,496,080	10,232
			목공사 및 수장공사	1	9,132,925	9,132,925	1,100
			전기공사	1	1,100,000	1,100,000	0
			사무용 집기 등 조달물품	1	4,262,970	4,262,970	0	학교 자체 예산
계							0